N° U.I.	1256
Fecha Salida	17/11/2004 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades A
Expediente	4074-1671/04 
Ente	[074.0] Municipalidad de LA MATANZA
Ámbito	Provincial
Resúmen	Consulta: Acerca de dos aspectos relativos a la redeterminación de precios en contratos de obra pública regidos por la Ley 6.021, en los términos del Decreto Provincial N° 2.113/02. Específicamente, solicita aclaración sobre si la redeterminación se debe aplicar sobre la totalidad del contrato o sobre lo que se encuentre pendiente de ejecución al momento de su aplicación y la fecha inicial para el respectivo cómputo.

Respuesta: En principio, debemos recordar que si bien el sistema de redeterminación de precios instituido por el Decreto 2.113/02 está dirigido a aquellos contratos de obra pública pendientes de ejecución a la fecha de vigencia del mismo - 10 de setiembre de 2002 -, el articulo 12° prevé que a partir de la entrada en vigencia del mismo, los Pliegos de Bases y Condiciones correspondientes a las futuras licitaciones deberán incorporar en su articulado las pautas que aseguren la plena vigencia y operatividad de sus términos y los de las normas que al efecto dicte el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia.
Con relación a la primera inquietud, la misma encuentra respuesta en el artículo 2° del citado Decreto, que establece que los montos contratados podrán ser redeterminados a solicitud del contratista, cuando los costos reflejen una variación superior al diez por ciento (10%) sobre los valores del contrato. Agrega que un diez por ciento (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante toda la vigencia del mismo, con la excepción del caso del artículo 6°, que establece que cuando la empresa contratista continúe con las obras de acuerdo con el nuevo plan de inversiones aprobado por el comitente, dentro de los quince (15) días corridos desde la vigencia del Acta de Redeterminación de Precios, podrán redeterminarse en un cien por ciento (100%).
En cuanto a la fecha tomada como base de cálculo para este reajuste, el artículo 5° de la Resolución 190 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, dictada a los efectos de establecer la metodología del sistema, establece para las obras licitadas a partir del 6 de enero de 2002, será la correspondiente al mes de la presentación de la oferta.
Si bien nada prevé con respecto a aquellas que se efectúan en carácter de mejoramiento de oferta, se entiende que el mes en que se efectúan debe remplazar a la citada en el párrafo anterior, ello en virtud de su propia finalidad. Con respecto a la alternativa que se efectúa en la consulta sobre las mismas - con reserva o sin ella -, no se entiende la situación puesta a consideración de esta Secretaría.