N° U.I.	29608
Fecha Salida	06/08/2018 
Estado	Público
Vocalía	
Municipalidades A
Expediente	5300-464-2018-0-1 
Ente	[048.0] Municipalidad de GENERAL PINTO
Ámbito	Municipal
Resúmen	
CONSULTA: El señor Intendente de la Municipalidad de GENERAL PINTO eleva una consulta acerca de la posibilidad de incluir una cláusula de redeterminación de precios en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a una licitación referida a la compra de hormigón H30 destinado a la ejecución de obras de pavimentación urbana –obra por administración-.

 En su nota de elevación de fojas 1/3, señala que la Licitación Pública N° 08/18, por el cual se tramita la “Adquisición de 2.100 m3 de hormigón simple H30”, contiene cláusula de Redeterminación de Precios -art. 16 del Pliego de Bases y Condiciones- que establece que “…Al precio ofertado por m3, se le aplicará la variación de la apertura Hormigón Elaborado del ICC – Cuadro 1.9, siendo el índice base para la determinación del cálculo de actualización, el último publicado oficialmente por el Organismo competente en la materia (INDEC)”. Agrega también que el material referido es inacopiable por parte de la empresa contratista y/o de la Municipalidad, surgiendo la necesidad de adecuar los valores en función del incremento continuo y sistemático de los costos que inciden en su precio, aumento que causa un desajuste en los contratos vigentes e incertidumbre de futuros oferentes en próximas licitaciones.

RESPUESTA: El Régimen de Redeterminación de Precios vigente en la provincia de Buenos Aires está dado por el Decreto 367/17 E y sus Anexos I, A, B y C, o las disposiciones del Decreto 2113/02 y sus modificatorias, según corresponda, mecanismos previstos específicamente a los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley N° 6021; por ende no aplicables al caso de adquisición de insumos.

Sin dejar de reconocer las motivaciones y las razones que han llevado a las autoridades del municipio a realizar tal previsión para mitigar los efectos de los incrementos en los valores de los materiales para la ejecución de obras de infraestructura por administración, no procede la inclusión de la cláusula traída a consulta.